‘상남시장 막구조그늘막 설치공사’ 과업지시서

2015.5

창원상남시장 상인회

(문화관광형시장사업단)

Ⅰ		과업개요

1. 공사명 : 상남시장 막구조그늘막 설치공사

2. 과업목적

야외판매에 시설설치된 현대식 막구그늘막을 설치하여 주변의 현대식 건물들과의    가림막 디자인 및 제작를 통해 상남시장상인회의 정체성을 문화적 시장을 방문하    는 고객에게 기회제공과 시장 상인 및 지역민들에게 자긍심을 고취시키는 시장으    로 조성하고자 함

3. 과업범위

가. 공간적 범위

1) 위치 : 상남시장 2층 남문쪽 동,서 테라스

2) 규모 : 일자형  막구조물 및 천막설치공사

※ 참조 : 상남시장 막구조물 설치공사 첨부파일(PDF 파일)

나. 내용적 범위

1) 막구조물 설치

2) 그늘막 설치(상인회 제공)

3) 사후관리 및 유지보수 방안 수립

4. 과업기간 : 계약일로부터 1개월 (30일간)

Ⅱ		공정보고

1. 업무협의

가. 수급자는 과업수행계획서를 제출할 때 발주자와 1차 업무협의를 한다.

나. 과업의 수행과정 전환점이 되는 시점과 예기치 못한 사항이 발생하였을 때에        는 발주자 업무 협의를 하여야 한다.

다. 수급자는 발주 후 별도로 정하는 기간 내에 과업이 완료될 수 있도록 상인들        과 설명 등의 임무를 성실히 수행하여 과업 일정이 지연되지 않도록 하여야         한다.

*상인회 요청에 따른 계약 변경될 수 있다.

2. 공사 진행보고

가. 착공계제출 : 계약체결 후 7일이내 효율적인 공사수행을 위해 공사수행 방향    에 대해 착공서 제출함

1) 착수일 7일 이내 공사수행 계획서를 작성, 공정표제출하여 발주자의 승인을     받아야 한다.

2) 본 공사 수행 시  현장대리인을 배치하여야 한다.

나. 준공계 : 사진대지  하자보수 각서  세금계산서

Ⅲ		설계변경 조건

1. 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 계약상대자는 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정안전부 예규 제254호, 2009.8.6)에 따라 설계변경을 검토하여 발주자에 보고하여야 한다.

가. 사업 범위의 변경이 있는 경우

나. 공사법위변경 수행중 발주자의 계획변경으로 인하여 공사내용의 변경이 있는   경우

다. 추가 공사 수행할 경우

라. 특정 공사 항목의 삭제 및 감소가 있는 경우

마. 기타 추가공사 등의 정당한 변경사유가 발생한 경우

Ⅳ		일반사항

◦ 계약 체결후 7일 이내에 공사을 착공하여야 하며 착공계 등 착공시에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

◦ 본 공사으로 인하여 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 때는 수급인 부담으로 손실 보상하여야 한다.

◦ 본 과업 참여자는 발주자의 지시에 따라야 하며 불성실 또는 부당하게 공사을 수행하는 참여자에 대하여는 교체를 요구할 수 있다.

◦ 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

◦ 발주자는 이 공사을 수행함에 있어 수시로 수급인에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 감독원에 대해 적극 협조하고 지적사항을 시정하여야 한다.

◦ 수급인은 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 공사수행상 발생한 모든 하자에 대하여 수급인의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수급인은 공사준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

◦ 본 공사지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 발주기관과 협의하여 계약상대자 책임하에 이를 성실하게 이행한다.